УТВЕРЖДЕНЫ 
Постановлением Госкомстата России 
от 11 ноября 1999 г. N 100 
Постановление Госкомстата РФ от 11.11.99 N 100 включено в базу отдельным документом.

УНИФИЦИРОВАННЫЕ ФОРМЫ
ПЕРВИЧНОЙ УЧЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО УЧЕТУ РАБОТ В КАПИТАЛЬНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И РЕМОНТНО - СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

АЛЬБОМ УНИФИЦИРОВАННЫХ ФОРМ
ПЕРВИЧНОЙ УЧЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО УЧЕТУ РАБОТ В КАПИТАЛЬНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И РЕМОНТНО - СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
Альбом унифицированных форм первичной учетной документации разработан НИПИстатинформ Госкомстата России на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 8 июля 1997 г. N 835. Образцы унифицированных форм первичной учетной документации, входящие в данный альбом, утверждены Постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. N 100. В альбом также включены типовые межотраслевые формы N КС-6, КС-11, КС-14, утвержденные Постановлением Госкомстата России от 30 октября 1997 г. N 71а.
Применение унифицированных форм первичной учетной документации регламентируется "Положением по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации", утвержденным Минфином Российской Федерации от 29 июля 1998 г. N 34н.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
В настоящий альбом включены унифицированные формы первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно - строительных работ, а также ранее утвержденные типовые межотраслевые формы (N КС-6, N КС-11, N КС-14). К формам даны краткие указания по их применению и заполнению.
Применение и оформление первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно - строительных работ регламентируется законодательными и нормативными правовыми актами в области строительства и градостроительства, а также инструкциями по заполнению форм федерального государственного статистического наблюдения по капитальному строительству.
Ведение первичного учета по унифицированным формам первичной учетной документации, включенным в настоящий альбом, распространяется на юридические лица всех организационно - правовых форм и форм собственности, осуществляющие деятельность в отраслях экономики.
Первичные учетные документы могут составляться на бумажных и машинных носителях.
Коды в формах служат для возможности обобщения и систематизации информации при автоматизированной обработке данных. Коды, по которым нет ссылок на общероссийские классификаторы, проставляются по системе кодирования, принятой в организации.
В соответствии с Порядком применения унифицированных форм первичной учетной документации, утвержденным Постановлением Госкомстата России от 24 марта 1999 г. N 20, в унифицированные формы первичной учетной документации (кроме форм по учету кассовых операций), утвержденные Госкомстатом России, организация при необходимости может вносить дополнительные реквизиты. При этом все реквизиты утвержденных Госкомстатом России унифицированных форм первичной учетной документации остаются без изменения (включая код, номер формы, наименование документа). Удаление отдельных реквизитов из унифицированных форм не допускается.
Вносимые изменения должны быть оформлены соответствующим организационно - распорядительным документом организации.
Форматы бланков, указанных в альбомах унифицированных форм первичной учетной документации, являются рекомендуемыми и могут изменяться.
При изготовлении бланочной продукции на основе унифицированных форм первичной учетной документации допускается вносить изменения в части расширения и сужения граф и строк с учетом значности показателей, включения дополнительных строк (включая свободных) и вкладных листов для удобства размещения и обработки необходимой информации.

ПЕРЕЧЕНЬ ФОРМ ПЕРВИЧНОЙ УЧЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО УЧЕТУ РАБОТ В КАПИТАЛЬНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И РЕМОНТНО - СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

Номер формы 	Наименование формы 	Формат 	
КС-2 	Акт о приемке выполненных работ 	А4L 	
КС-3 	Справка о стоимости выполненных работ и затрат 	А4 	
КС-6 	Общий журнал работ 	2А4 	
КС-6а 	Журнал учета выполненных работ 	А3 	
КС-8 	Акт о сдаче в эксплуатацию временного (нетитульного) сооружения 	А4L 	
КС-9 	Акт о разборке временных (нетитульных) сооружений 	А4L 	
КС-10 	Акт об оценке подлежащих сносу (переносу) зданий, строений, сооружений и насаждений 	А4L 	
КС-11 	Акт приемки законченного строительством объекта 	А4 	
КС-14 	Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией 	2А4 	
КС-17 	Акт о приостановлении строительства 	А4L 	
КС-18 	Акт о приостановлении проектно - изыскательских работ по неосуществленному строительству 	А4L 	

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМ ПО УЧЕТУ РАБОТ В КАПИТАЛЬНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И РЕМОНТНО - СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (форма N КС-2)
Применяется для приемки выполненных подрядных строительно - монтажных работ производственного, жилищного, гражданского и других назначений. Акт составляется на основании данных Журнала учета выполненных работ (форма N КС-6а) в необходимом количестве экземпляров. Акт подписывается уполномоченными представителями сторон, имеющих право подписи (производителя работ и заказчика (генподрядчика)).
На основании данных Акта о приемке выполненных работ заполняется Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма N КС-3).

СПРАВКА О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ (форма N КС-3)
Применяется для расчетов с заказчиком за выполненные работы. Справка составляется в необходимом количестве экземпляров. Один экземпляр - для подрядчика, второй - для заказчика (застройщика, генподрядчика). В адрес финансирующего банка и инвестора Справка представляется только по их требованию.
Выполненные работы и затраты в Справке отражаются исходя из договорной стоимости.
Справка по форме N КС-3 составляется на выполненные в отчетном периоде строительные и монтажные работы, работы по капитальному ремонту зданий и сооружений, другие подрядные работы и представляется субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком заказчику (застройщику).
В стоимость выполненных работ и затрат включается стоимость строительно - монтажных работ, предусмотренных сметой, а также прочие затраты, не включаемые в единичные расценки на строительные работы и в ценники на монтажные работы (рост стоимости материалов, заработной платы, тарифов, расходов на эксплуатацию машин и механизмов, дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, средства на выплату надбавок за подвижной и разъездной характер работы, надбавки за работу на Крайнем Севере и в приравненных к нему районах, изменение условий организации строительства и т.п.).
В графе 4 стоимость работ и затрат указывается нарастающим итогом с начала выполнения работ, включая отчетный период.
В графе 5 стоимость работ и затрат указывается нарастающим итогом с начала года, включая отчетный период.
В графе 6 выделяются данные за отчетный период.
Данные приводятся в целом по стройке, с выделением данных по каждому входящему в ее состав объекту (пусковому комплексу, этапу).
В Справке по требованию заказчика или инвестора приводятся данные по видам оборудования, относящегося к стройке (пусковому комплексу, этапу), к монтажу которого приступили в отчетном периоде. При этом в графе 2 указываются наименование и модель оборудования, а в графах 4, 5, 6 - данные о выполненных монтажных работах.
По строке "Итого" отражается итоговая сумма работ и затрат без учета НДС.
Отдельной строкой указывается сумма НДС.
По строке "Всего" указывается стоимость выполненных работ и затрат с учетом НДС.

ОБЩИЙ ЖУРНАЛ РАБОТ (форма N КС-6)
Применяется для учета выполнения строительно - монтажных работ. Является основным первичным документом, отражающим технологическую последовательность, сроки, качество выполнения и условия производства строительно - монтажных работ.
Ведется на строительстве (при реконструкции, расширении) отдельных или группы однотипных, одновременно строящихся зданий (сооружений), расположенных в пределах одной строительной площадки.
Ведется производителем работ (старшим производителем работ, руководителем смены), ответственным за строительство здания или сооружения. В специализированных строительно - монтажных организациях ведется специальный журнал работ, который находится у ответственных лиц, выполняющих эти работы. По окончании работ специальный журнал передается генеральной подрядной строительной организации.
Титульный лист заполняется до начала строительства генеральной подрядной строительной организацией с участием проектной организации и заказчика. Стоимость работ указывается в договорных ценах.
Список инженерно - технического персонала, занятого на строительстве объекта (раздел 1), составляет руководитель генподрядной строительной организации.
В разделе 2 приводится перечень всех актов в календарном порядке.
В раздел 3 включаются все работы по частям и элементам зданий и сооружений, качество выполнения которых контролируется и подлежит оценке.
Раздел 4 заполняется работником, ответственным за ведение общего журнала работ. Регулярные сведения о производстве работ с начала и до их завершения, включаемые в раздел 5, являются основной частью журнала. Эта часть журнала должна содержать сведения о начале и окончании работы и отражать ход ее выполнения. Описание работ должно производиться по конструктивным элементам здания или сооружения с указанием осей, рядов, отметок, этажей, ярусов, секций и помещений, где выполнялись работы.
Здесь же должны приводиться краткие сведения о методах производства работ, применяемых материалах, готовых изделиях и конструкциях, вынужденных простоях строительных машин (с указанием принятых мер), испытаниях оборудования, систем, сетей и устройств (опробование вхолостую или под нагрузкой, подаче электроэнергии, испытания на прочность и герметичность и др.), отступлениях от рабочих чертежей (с указанием причин) и их согласовании, изменении расположения охранных, защитных и сигнальных ограждений, переносе транспортных и пожарных проездов, прокладке, перекладке и разборке временных инженерных сетей, наличии и выполнении схем операционного контроля качества, исправлениях или переделках выполненных работ (с указанием виновных, а также о метеорологических и других особых условиях производства работ).
В раздел 6 вносится замечание работников, контролирующих производство и безопасность работ в соответствии с предоставленными им правами, а также уполномоченных представителей проектной организации или ее авторского надзора. Общий журнал должен быть пронумерован, прошнурован, оформлен всеми подписями на титульном листе и скреплен печатью строительной организации, его выдавшей.
При сдаче законченного строительством объекта в эксплуатацию общий и специальный журналы работ предъявляются рабочей комиссии и после приемки объекта передаются на постоянное хранение заказчику или по поручению заказчика эксплуатационной организации.

ЖУРНАЛ УЧЕТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (форма N КС-6а)
Применяется для учета выполненных работ и является накопительным документом, на основании которого составляется акт приемки выполненных работ по форме N КС-2 и справка о стоимости выполненных работ по форме N КС-3.
Журнал учета выполненных работ ведет исполнитель работ по каждому объекту строительства на основании замеров выполненных работ и единых норм и расценок по каждому конструктивному элементу или виду работ.
Затраты по строке "Накладные и прочие расходы" отражаются на основе смет этих расходов за отчетный период в размерах, определяемых в соответствии с принятой в строительной организации методикой.

АКТ О СДАЧЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ВРЕМЕННОГО (НЕТИТУЛЬНОГО) СООРУЖЕНИЯ (форма N КС-8)
Применяется для учета приемки законченного строительством временного (нетитульного) сооружения.
Акт составляется исполнителем строительно - монтажных работ в 3-х экземплярах, первый экземпляр остается у лица, сдавшего объект на хранение, второй экземпляр передается лицу, принявшему объект на ответственное хранение, третий - передается в бухгалтерию.
Материалы, подлежащие возврату, указываются в таблице акта. Против каждого вида материала показывается количество и процент годности материалов, предполагаемых к возврату после разборки данного объекта. В графе 6 указывается цена материалов с учетом процента годности.
Данные о предполагаемом возврате материалов применяются в дальнейшем для контроля за возвратом материалов при разборке временных (нетитульных) сооружений.

АКТ О РАЗБОРКЕ ВРЕМЕННЫХ (НЕТИТУЛЬНЫХ) СООРУЖЕНИЙ (форма N КС-9)
Применяется для оформления разборки временных (нетитульных) сооружений, для оприходования фактически полученных от разборки материалов, подлежащих возврату.
Акт составляется комиссией, специально назначенной приказом (распоряжением) руководителя строительной организации или уполномоченного лица.
Акт составляется в необходимом количестве экземпляров, один из которых передается в бухгалтерию, другой - лицу, принявшему объект на ответственное хранение.
В акте отмечается количество и процент годности фактически полученных от разборки временных сооружений материалов, а также предполагаемый возврат материалов при возведении данного сооружения, который указывается на основании данных граф 5, 6 Акта о сдаче в эксплуатацию временных (нетитульных) сооружений (форма N КС-8). В случае расхождений в количестве полученных от разборки материалов с количеством предполагаемого возврата лицо, ответственное за возврат, объясняет причину расхождения.
Фактически полученные от разборки материалы передаются материально ответственному лицу, и в акте проставляется его подпись.

АКТ ОБ ОЦЕНКЕ ПОДЛЕЖАЩИХ СНОСУ (ПЕРЕНОСУ) ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И НАСАЖДЕНИЙ (форма N КС-10)
Применяется для определения размера материального ущерба, в связи со сносом (переносом) зданий, строений, сооружений и уничтожением или порчей насаждений (плодово - ягодных, посевов и др.). Акт составляется комиссией, в состав которой должны входить собственник (владелец) здания, строения, сооружения, насаждения, подлежащего сносу, или его представитель, представитель заказчика (застройщика) вновь строящегося объекта, представитель бюро технической инвентаризации. В случае необходимости в состав комиссии могут входить представители других заинтересованных организаций.
Акт составляется в необходимом количестве экземпляров.
В графе 9 указывается рыночная стоимость строения (насаждения) на дату оценки.
При переносе строений и насаждений строка "Стоимость строения (насаждения) на дату оценки по рыночной цене, подлежащая возмещению собственнику (владельцу)" не заполняется (проставляется прочерк).

АКТ ПРИЕМКИ ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА (форма N КС-11)
Применяется как документ приемки законченного строительством объекта производственного и жилищно - гражданского назначения всех форм собственности (здания, сооружения, их очередей, пусковых комплексов, включая реконструкцию, расширение и техническое перевооружение) при их полной готовности в соответствии с утвержденным проектом, договором подряда (контрактом).
Акт приемки является основанием для окончательной оплаты всех выполненных исполнителем работ в соответствии с договором (контрактом).
Составляется в необходимом количестве экземпляров и подписывается представителями исполнителя работ (генерального подрядчика) и заказчика или другим лицом, на это уполномоченным инвестором, соответственно для исполнителя работ (генерального подрядчика) и заказчика.
Оформление приемки производится заказчиком на основе результатов проведенных им обследований, проверок, контрольных испытаний и измерений, документов исполнителя работ, подтверждающих соответствие принимаемого объекта утвержденному проекту, нормам, правилам и стандартам, а также заключений органов надзора.
К акту приемки объекта исполнитель работ и заказчик прилагают оформленные документы, перечень которых приведен в приложении 2 к "Временному положению по приемке законченных строительством объектов", разработанному Госстроем России в соответствии с Законом РСФСР "Об инвестиционной деятельности в РСФСР" и другими законодательными актами Российской Федерации в целях развития новых экономических отношений между участниками инвестиционного процесса и повышения ответственности каждого из них за результаты своей работы. Вся документация по приемке объекта передается заказчиком пользователю объекта.
Исполнитель работ на основе акта приемки представляет в установленном порядке документы статистической отчетности о выполнении договорных обязательств. В документы статистической отчетности введенный в действие объект включается за тот отчетный период, в котором зарегистрирован факт ввода. Факт ввода в действие принятого объекта регистрируется заказчиком (пользователем объекта) в местных органах исполнительной власти в порядке, установленном этими органами.

АКТ ПРИЕМКИ ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИЕЙ (форма N КС-14)
Является документом по приемке и вводу законченного строительством объекта производственного и жилищно - гражданского назначения и зачисления их в состав основных фондов (основных средств) всех форм собственности, включая государственную (федеральную), а также объектов, сооруженных за счет льготного кредитования (зданий, сооружений, их очередей, пусковых комплексов, включая реконструкцию, расширение и техническое перевооружение).
Акт приемки является основанием для окончательной оплаты всех выполненных исполнителем работ в соответствии с договором (контрактом).
Составляется в необходимом количестве экземпляров и подписывается представителями исполнителя работ (генерального подрядчика) и заказчика или другим лицом, на это уполномоченным инвестором, а также членами приемочной комиссии, состав которой определяется инвестором или заказчиком соответственно для исполнителя работ (генерального подрядчика), заказчика. Стоимость выполненных работ указывается в фактически действующих ценах текущего года.
Оформление приемки производится заказчиком и членами приемочной комиссии на основе результатов проведенных ими обследований, проверок, контрольных испытаний и измерений, документов исполнителя работ, подтверждающих соответствие принимаемого объекта утвержденному проекту, нормам, правилам и стандартам, а также заключений органов надзора.
К акту приемки объекта исполнитель работ и заказчик прилагают оформленные документы, перечень которых приведен в приложении 2 к "Временному положению по приемке законченных строительством объектов", разработанному Госстроем России в соответствии с Законом РСФСР "Об инвестиционной деятельности в РСФСР" и другими законодательными актами Российской Федерации в целях развития новых экономических отношений между участниками инвестиционного процесса и повышения ответственности каждого из них за результаты своей работы.
Вся документация по приемке объекта передается заказчиком пользователю объекта.
Исполнитель работ на основе акта приемки представляет в установленном порядке документы статистической отчетности о выполнении договорных обязательств. В документы статистической отчетности введенный в действие объект включается за тот отчетный период, в котором зарегистрирован факт ввода. Факт ввода в действие принятого объекта регистрируется заказчиком (пользователем объекта) в местных органах исполнительной власти в порядке, установленном этими органами.

АКТ О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА (форма N КС-17)
Применяется для оформления приостановления строительства (консервации или прекращения строительства).
По получении решения о консервации или окончательного прекращения строительства заказчик (застройщик) обязан произвести окончательный расчет по этому строительству с исполнителем работ.
Акт составляется в необходимом количестве экземпляров по каждой стройке с указанием раздельно приостановленных строительством работ. Один экземпляр передается подрядчику, второй - заказчику (застройщику). Третий представляется только по требованию инвестора.

АКТ О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ПРОЕКТНО - ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ ПО НЕОСУЩЕСТВЛЕННОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ (форма N КС-18)
Применяется для оформления приостановления начатых проектно - изыскательских работ вследствие невключения этих работ в план или нецелесообразности дальнейшего проектирования строительства.
Акт составляется заказчиком в необходимом количестве экземпляров, из которых один остается в бухгалтерии заказчика, два экземпляра направляются проектной организации, четвертый экземпляр представляется только по требованию инвестора.

УНИФИЦИРОВАННАЯ ФОРМА N КС-2
УТВЕРЖДЕНА 
Постановлением Госкомстата России 
от 11 ноября 1999 г. N 100 

	 	 	 	 	 	 	Коды	
 	 	 	 	Форма по ОКУД	 	0322005	
 	 	 	 	Дата составления	 	 	 	 	
Инвестор	 	 	 	 	по ОКПО	 	 	 	 	
 	(организация, адрес, телефон, факс)	 	 	 	 	 	
Заказчик (Генподрядчик)	 	 	 	 	по ОКПО	 	 	 	 	
 	 	(организация, адрес, телефон, факс)	 	 	 	 	 	
Подрядчик (Субподрядчик)	 	 	 	 	по ОКПО	 	 	 	 	
 	 	(организация, адрес, телефон, факс)	 	 	 	 	 	
Стройка	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	(наименование, адрес)	 	 	 	 	 	
Объект 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	(наименование)
	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	Вид деятельности по ОКДП	 	 	 	 	
Договор подряда (контракт)	 	 	 	номер	 	 	
 	 	 	 	 	дата	 	 	 	 	
 	 	 	 	Вид операции	 	 	

	Номер документа	Дата составления	 	Отчетный период	
 				с	по	

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость
в соответствии с договором подряда (субподряда)	 	руб	

Номер	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ	
по порядку	позиции по смете	 	 	 	количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	

 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	и т.д. 	 	 	 	 	 	
 	Итого	 	x	 	

2-я страница формы N КС-2

Номер	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ	
по порядку	позиции по смете	 	 	 	количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	

 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	и т.д.	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	Итого	 	x	 	
 	 	 	 	Всего по акту	 	x	 	

Сдал	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	
 	 	должность	 	подпись	 	расшифровка подписи	
М.П.	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	
Принял	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	
 	 	должность	 	подпись	 	расшифровка подписи	
М.П.	 	 	 	 	 	 	

УНИФИЦИРОВАННАЯ ФОРМА N КС-3
УТВЕРЖДЕНА 
Постановлением Госкомстата России 
от 11 ноября 1999 г. N 100 

	 	 	 	 	 	 	Коды	
 	 	 	 	Форма по ОКУД	 	0322001	
Инвестор	 	 	 	Дата составления	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	по ОКПО	 	 	 	 	
 	(организация, адрес, телефон, факс)	 	 	 	 	 	
Заказчик (Генподрядчик)	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	по ОКПО	 	 	 	 	
 	 	(организация, адрес, телефон, факс)	 	 	 	 	 	
Подрядчик (Субподрядчик)	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	по ОКПО	 	 	 	 	
 	 	(организация, адрес, телефон, факс)	 	 	 	 	 	
Стройка	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	по ОКПО	 	 	 	 	
 	(наименование, адрес)	 	 	 	 	 	
 	 	 	Вид деятельности по ОКДП	 	 	 	 	
Договор подряда (контракт)	 	 	 	номер	 	 	
 	 	 	 	 	дата	 	 	 	 	
 	 	 	 	Вид операции	 	 	

	Номер документа	Дата составления	 	Отчетный период	
 	 	 		с	по	

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат,руб.	
 	 	 	с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период	
1	2	3	4	5	6	
 	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ	 	 	 	 	
 	в том числе:	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	
 	и т.д.	 	 	 	 	
 	 	 	 	Итого	 	
 	 	 	 	Сумма НДС	 	
 	 	 	 	Всего с учетом НДС	 	

Заказчик (Генподрядчик)	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	
 	 	должность	 	подпись	 	расшифровка подписи	
 	 	 	 	 	 	 	
М.П.	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	
Подрядчик (Субподрядчик)	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	
 	 	должность	 	подпись	 	расшифровка подписи	
 	 	 	 	 	 	 	
М.П.	 	 	 	 	 	 	

ТИПОВАЯ МЕЖОТРАСЛЕВАЯ ФОРМА N КС-6
УТВЕРЖДЕНА 
Постановлением
Госкомстата России
от 30.10.97 N 71а

 	  	
 Коды 	

                                          Форма по ОКУД 	  	
0336001	

                                       Дата составления 	  	

                                                по ОКПО 	  	

 
                ОБЩИЙ ЖУРНАЛ РАБОТ N _________                     
  
 Адрес ____________________________________________________________

    по строительству объекта _____________________________________
                             предприятие, здание, сооружение и т.п.
 Адрес объекта ____________________________________________________
 __________________________________________________________________
 Должность,  фамилия,  имя, отчество и подпись лица, ответственного
 от строительной организации за строительство объекта   и   ведение
 общего журнала работ _____________________________________________
 __________________________________________________________________
 Генеральная   проектная   организация,  фамилия,  имя, отчество  и
 подпись главного инженера проекта ________________________________
 __________________________________________________________________
 __________________________________________________________________
 __________________________________________________________________
 Заказчик   (организация),  должность,  фамилия,  имя, отчество   и
 подпись руководителя (представителя технического надзора) ________
 __________________________________________________________________
 Начало работ: по договору (контракту) ____________________________
 фактически _______________________________________________________
 Окончание   работ   (ввод в эксплуатацию): по договору (контракту)
 __________________________________________________________________
 фактически _______________________________________________________

    В настоящем  журнале  _____  пронумерованных  и прошнурованных
 страниц.

    Должность, фамилия,   имя,  отчество  и  подпись  руководителя
 строительной организации, выдавшего журнал _______________________

    Дата выдачи, печать организации

    Основные показатели строящегося объекта,  предприятия,  здания
 или сооружения  (мощность,  производительность,  полезная площадь,
 вместимость и т.п.; стоимость работ) _____________________________
 __________________________________________________________________
 __________________________________________________________________
 __________________________________________________________________
 __________________________________________________________________

    Утвержденная инстанция  и  дата  утверждения проекта (рабочего
 проекта) _________________________________________________________
 __________________________________________________________________

    Субподрядные организации и выполняемые ими работы ____________
 __________________________________________________________________
 __________________________________________________________________

    Организации, разработавшие проектно - сметную документацию ___
 __________________________________________________________________
 __________________________________________________________________
 __________________________________________________________________

    Отметки об изменениях в записях на титульном листе ___________
 __________________________________________________________________
 __________________________________________________________________
 __________________________________________________________________

        Раздел 1. СПИСОК ИНЖЕНЕРНО - ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА,       
                 ЗАНЯТОГО НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБЪЕКТА                 

Фамилия, имя, отчество, 
 занимаемая должность, 
   участок работы       	
Дата начала 
работ на  
строительстве 
объекта  	
Отметка о получении 
разрешения на право 
 производства работ 
 или о прохождении 
    аттестации     
 	
Дата окончания 
работ на    
строительстве  
объекта   	

           1             	
    2     	
          3          	
      4    	

  	  	  	 	

 

    По данному образцу печатать 2,  3,  4-ю  страницу  журнала  по
 форме N КС-6.                                                     
  
           Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ АКТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПРИЕМКИ          
          ОТВЕТСТВЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ          
                           СКРЫТЫХ РАБОТ                           

Номер по 
порядку 
 	
Наименование актов (с указанием 
места расположения конструкций 
          и работ)             
 	
Дата подписания акта, 
 фамилии, инициалы и 
должности подписавших 

    1     	
                2                  	
           3          	

  	

  	

  	

 

    По данному  образцу  печатать  с 5-й страницы по 14-ю страницу
 включительно журнала по форме N КС-6.                             

     Раздел 3. ВЕДОМОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ И     
           ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬНО - МОНТАЖНЫХ РАБОТ           

Дата 
 	
Наименование конструктивных 
 частей и элементов, места 
 их расположения со ссылкой 
   на номера чертежей, с   
 указанием отметок и осей   	
Результаты 
контроля и 
  оценки  
 качества 
 	
Должности и подписи 
  лиц, оценивающих 
  качество работ в 
 порядке контроля и 
      надзора      	

  1   	
              2                	
     3     	
          4         	

  	

  	

 	

  	

 

    По данному  образцу  печатать с 15-й страницы по 20-ю страницу
 включительно журнала по форме N КС-6.                             
  
           Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЖУРНАЛОВ РАБОТ           

Наименование специального 
журнала и дата   
его выдачи             	
Организация, ведущая журнал, 
фамилия, инициалы и должность 
ответственного лица    	
Дата сдачи - 
приемки журнала и 
подписи должностных 
лиц 	

           1            	
              2               	
      3     	

  	

  	

  	

 

    По данному образцу печатать 21-ю и 22-ю  страницы  журнала  по
 форме N КС-6.                                                     
  
              Раздел 5. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ              

Дата 
 	
Краткое описание и условия производства 
работ (со ссылкой, при необходимости,  
на работы, выполняемые субподрядными   
организациями, с указанием 
метеоусловий, отметок и осей зданий и 
сооружений); 
должность, фамилия, инициалы и   
подпись ответственного лица             	
Должность и подпись 
ответственного     
лица, контролирующего 
ведение журнала           	

  1   	
                  2                     	
          3         	

  	

  	

  	

    По   данному   образцу   печатать  с 23-й  по  122-ю  страницу
 включительно журнала по форме N КС-6.                             
  
         Раздел 6. ЗАМЕЧАНИЯ КОНТРОЛИРУЮЩИХ ОРГАНОВ И СЛУЖБ        

Дата 
 	
Замечания контролирующих органов или   
ссылка на предписание, с указанием отметок 
и осей зданий и сооружений. 
Должность, фамилия, инициалы и подпись    
контролирующего лица                    	
Отметки о принятии 
замечаний к 
исполнению и о 
проверке 
их выполнения      	

  1   	
                   2                       	
         3         	

  	

  	

  	

 
  По   данному   образцу  печатать со 123-й  по  128-ю  страницу
 включительно журнала по форме N КС-6.                             
  
  Печатать на последней странице в правом нижнем углу.          
                                                                
  В этой книге пронумеровано                                    
  и прошнуровано ___ страниц                                    
  и опечатаны сургучной печатью                                 
                                                                
  М.П.   ___________  _____________ _________________________   
          должность      подпись       расшифровка подписи      
                                                                
  "__" __________ 19__ г.                                       

  

УНИФИЦИРОВАННАЯ ФОРМА N КС-6А
УТВЕРЖДЕНА 
Постановлением Госкомстата России 
от 11 ноября 1999 г. N 100 

	 	 	 	 	 	 	Коды	
 	 	 	 	Форма по ОКУД	 	0322006	
Заказчик	 	 	 	Дата составления	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	по ОКПО	 	 	 	 	
 	(организация, адрес, телефон, факс)	 	 	 	 	 	
Подрядчик	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	по ОКПО	 	 	 	 	
 	 	(организация, адрес, телефон, факс)	 	 	 	 	 	
Стройка	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	по ОКПО	 	 	 	 	
 	 	(наименование, адрес)	 	 	 	 	 	
Объект	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	по ОКПО	 	 	 	 	
 	(наименование, адрес)	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	Вид деятельности по ОКДП	 	 	 	 	
Договор подряда (контракт)	 	 	 	номер	 	 	
 	 	 	 	 	дата	 	 	 	 	
 	 	 	 	Вид операции	 	 	

ЖУРНАЛ
УЧЕТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за __________ _____ год

Сметная (договорная) стоимость
в соответствии с договором подряда (субподряда)	 	руб	

Составил	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	
 	 	должность	 	подпись	 	расшифровка подписи	
Проверил	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	
 	 	должность	 	подпись	 	расшифровка подписи	
По данному образцу печатать все четные страницы формы N КС-6а

Номер 	Конструктивные элементы и виды работ 	Номер единичной расценки 	Единица измерения 	Цена за единицу, руб. 	Количество работ по смете 	Сметная (договорная) стоимость, руб. 	Выполнено работ 	
по порядку	позиции по смете 	 	 	 	 	 	 	 	январь 	 	 	февраль 	 	 	март 	 	 	апрель 	 	 	май 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	количество	стоимость, руб. 	стоимость фактически выполненных работ с начала строительства, руб. 	количество	стоимость, руб. 	стоимость фактически выполненных работ с начала строительства, руб. 	количество	стоимость, руб. 	стоимость фактически выполненных работ с начала строительства, руб. 	количество	стоимость, руб. 	стоимость фактически выполненных работ с начала строительства, руб. 	количество	стоимость, руб. 	стоимость фактически выполненных работ с начала строительства, руб. 	
1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	10 	11 	12 	13 	14 	15 	16 	17 	18 	19 	20 	21 	22 	23 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	и т.д. 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Итого	x	x	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Накладные и прочие расходы	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Всего	x	x	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
По данному образцу печатать все нечетные страницы формы N КС-6а

Выполнено работ 	
июнь 	июль 	август 	сентябрь 	октябрь 	ноябрь 	декабрь 	за ______ год 	
количество	стоимость, руб. 	стоимость фактически выполненных работ с начала строительства, руб. 	количество	стоимость, руб. 	стоимость фактически выполненных работ с начала строительства, руб. 	количество	стоимость, руб. 	стоимость фактически выполненных работ с начала строительства, руб. 	количество	стоимость, руб. 	стоимость фактически выполненных работ с начала строительства, руб. 	количество	стоимость, руб. 	стоимость фактически выполненных работ с начала строительства,руб. 	количество	стоимость, руб. 	стоимость фактически выполненных работ с начала строительства, руб. 	количество	стоимость, руб. 	стоимость фактически выполненных работ с начала строительства, руб. 	количество	стоимость, руб. 	стоимость фактически выполненных работ с начала строительства, руб. 	
24 	25 	26 	27 	28 	29 	30 	31 	32 	33 	134 	35 	36 	37 	38 	39 	40 	41 	42 	43 	44 	45 	46 	47 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

УНИФИЦИРОВАННАЯ ФОРМА N КС-8
УТВЕРЖДЕНА 
Постановлением Госкомстата России 
от 11 ноября 1999 г. N 100 

	 	 	 	 	 	 	Коды	
 	 	 	 	Форма по ОКУД	 	0322007	
Организация	 	 	 	Дата составления	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	по ОКПО	 	 	
 	(организация, адрес, телефон, факс)	 	 	 	
Структурное подразделение	 	 	 	по ОКПО	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	(наименование)	 	 	 	
Объект (сооружение)	 	 	 	по ОКПО	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	(наименование)	 	 	 	 	 	
 	 	 	Вид деятельности по ОКДП	 	 	
Договор подряда (контракт)	 	 	номер	 	 	
 	 	 	 	 	дата	 	 	 	 	
 	 	 	 	Вид операции	 	 	

	Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
 	 	 	 	с	по	

АКТ
О СДАЧЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ВРЕМЕННОГО (НЕТИТУЛЬНОГО)
СООРУЖЕНИЯ

Площадь	 	кв. м	
 	 	 	
Объем	 	куб. м	
 	 	 	
Фактическая стоимость объекта (сооружения)	 	руб.	
 	 	 	
Ожидаемый возврат материалов	 	руб.	

 	 	 	

Ответственное лицо за возврат материалов	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	
 	должность	 	подпись	 	расшифровка подписи	

Ожидаемые расходы по разборке	 	руб.	
 	 	 	
Срок полезного использования	 	месяцев	

Председатель комиссии	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	
 	должность	 	подпись	 	расшифровка подписи	
 	 	 	 	 	 	
Члены комиссии:	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	
 	должность	 	подпись	 	расшифровка подписи	
 	 	 	 	 	 	
 	должность	 	подпись	 	расшифровка подписи	
 	 	 	 	 	 	
 	должность	 	подпись	 	расшифровка подписи	

Материалы, подлежащие возврату

Номер по порядку	Наименование материалов	Единица измерения	Количество	Процент годности	Цена, руб.	Сумма, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	

 	и т.д. 	 	 	 	 	 	
Итого	 	x	x	 	

Оборотная сторона формы N КС-8 

Номер по порядку	Наименование материалов	Единица измерения	Количество	Процент годности	Цена, руб.	Сумма, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	

 	и т.д. 	 	 	 	 	 	
Итого	 	x	x	 	

Объект на ответственное хранение	
принял	 	 	 	 	 	 	
 	 	должность	 	подпись	 	расшифровка подписи	
М.П.	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	
Объект оприходован за учетным N ________ "__" _______________ года	
 	 	 	 	 	 	 	
Главный бухгалтер	 	 	 	 	 	 	
 	 	(подпись)	 	(расшифровка подписи)	 	
"__" _____________ года	 	 	 	 	

УНИФИЦИРОВАННАЯ ФОРМА N КС-9
УТВЕРЖДЕНА 
Постановлением Госкомстата России 
от 11 ноября 1999 г. N 100 

	 	 	 	 	 	 	Коды	
 	 	 	 	Форма по ОКУД	 	0322008	
Организация	 	 	 	Дата составления	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	по ОКПО	 	 	 	 	
 	(организация, адрес, телефон, факс)	 	 	 	 	 	
Структурное подразделение	 	 	 	по ОКПО	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	(наименование)	 	 	 	 	 	
Объект (сооружение)	 	 	 	по ОКПО	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	(наименование)	 	 	 	 	 	
 	 	 	Вид деятельности по ОКДП	 	 	
Договор подряда (контракт)	 	 	 	 	номер	 	 	
 	 	 	 	 	дата	 	 	 	 	
 	 	 	 	Вид операции	 	 	

	Номер документа	Дата составления	 	Отчетный период	
 				с	по	

АКТ
О РАЗБОРКЕ ВРЕМЕННЫХ (НЕТИТУЛЬНЫХ) СООРУЖЕНИЙ
После разборки оприходованию подлежат следующие материалы:

Номер 	Наименование материалов 	Единица измерения 	Предполагаемый возврат 	Фактический возврат 	Объяснение расхождения в возврате 	
по порядку 	номенклатурный 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
		 	 	количество 	процент годности 	количество 	процент годности 	цена, руб. 	сумма, руб. 	 	
1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	10 	11 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	и т.д. 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	Итого 	 	 	

Оборотная сторона формы N КС-9 

Номер 	Наименование материалов 	Единица измерения 	Предполагаемый возврат 	Фактический возврат 	Объяснение расхождения в возврате 	
по порядку 	номенклатурный 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
		 	 	количество 	процент годности 	количество 	процент годности 	цена, руб. 	сумма, руб. 	 	
1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	10 	11 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	и т.д. 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	Итого 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	Всего по акту 	 	 	

Председатель комиссии	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	
 	должность	 	подпись	 	расшифровка подписи	
 	 	 	 	 	 	
Члены комиссии :	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	
 	должность	 	подпись	 	расшифровка подписи	
 	 	 	 	 	 	
 	должность	 	подпись	 	расшифровка подписи	
 	 	 	 	 	 	
 	должность	 	подпись	 	расшифровка подписи	
Перечисленные материалы на хранение приняты

Материально ответственное лицо	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	
 	должность	 	подпись	 	расшифровка подписи	

УНИФИЦИРОВАННАЯ ФОРМА N КС-10
УТВЕРЖДЕНА 
Постановлением Госкомстата России 
от 11 ноября 1999 г. N 100 

	 	 	 	 	 	 	Коды	
 	 	 	 	Форма по ОКУД	 	0322009	
 	 	 	 	Дата составления	 	 	 	 	
Организация	 	 	 	 	по ОКПО	 	 	 	 	
 	(организация, адрес, телефон, факс)	 	 	 	 	 	
Вид деятельности по ОКДП	 	 	
Основание для снова
строений, насаждений	 	 	 	 	номер	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	дата	 	 	 	 	
 	наименование документа	 	Вид операции	 	 	

	Номер документа	Дата составления	 	Отчетный период	
 	 	 		с	по	

	УТВЕРЖДАЮ	
 	 	
 	должность	
 	 	
 	подпись	 	расшифровка подписи	
 	"__" ____________ 19__ г.	

АКТ
ОБ ОЦЕНКЕ ПОДЛЕЖАЩИХ СНОСУ (ПЕРЕНОСУ) ЗДАНИЙ,
СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И НАСАЖДЕНИЙ

Место составления акта	 	
 	 	 	
Произведен осмотр и оценка подлежащих сносу	 	

(наименование объекта)	
причина сноса	 	 	 	
 	 	 	 	
принадлежащих	 	 	 	
 	 	 	 	
 	(наименование собственника (владельца), его адрес,	
 	ИНН, а для частных собственников паспортные данные)	
 	 	 	 	
Технический паспорт строения, подлежащего сносу, N __________ от "___" ___________ года	

Номер по порядку	Назначение строения или насаждения	Год ввода в эксплуатацию	Характеристика объекта (фундамент, стены, перекрытия, крыша, благоустройство и т.д.)	Площадь, кв. м	Высота, м	Объем, куб. м	Количество насаждений, шт.	Стоимость строения (насаждения) на дату оценки, руб.	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	и т.д.	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	Итого	 	 	

Оборотная сторона формы N КС-10 

Номер по порядку	Назначение строения или насаждения	Год ввода в эксплуатацию	Характеристика объекта (фундамент, стены, перекрытия, крыша, благоустройство и т.д.)	Площадь, кв. м	Высота, м	Объем, куб. м	Количество насаждений, шт.	Стоимость строения (насаждения) на дату оценки, руб.	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	и т.д.	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	Итого	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	Всего по акту	 	 	

Стоимость строения (насаждения) на дату оценки по рыночной цене, подлежащая возмещению собственнику (владельцу)	 	
 	(указывается основание и прилагается расчет)	

составляет 	 	руб.	
 	(сумма прописью)	 	

Председатель комиссии	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	
 	должность	 	подпись	 	расшифровка подписи	
 	 	 	 	 	 	
Члены комиссии :	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	
 	должность	 	подпись	 	расшифровка подписи	
 	 	 	 	 	 	
 	должность	 	подпись	 	расшифровка подписи	
 	 	 	 	 	 	
 	должность	 	подпись	 	расшифровка подписи	

С оценкой строений
и насаждений согласен	 	 	 	
 	 	 	 	
 	(подпись собственника (владельца))	 	расшифровка подписи	

ТИПОВАЯ МЕЖОТРАСЛЕВАЯ ФОРМА N КС-11
УТВЕРЖДЕНА 
Постановлением 
Госкомстата России 
от 30.10.97 N 71а 

АКТ N ______________
ПРИЕМКИ ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА
"__" _____________ 19__ Г.

	 	 	 	Коды 	
Организация	 	Форма по ОКУД	 	0336003	
 	 	по ОКПО	 	 	
 	 	Дата составления	 	 	

Код вида операции 	Код 	
	строительной организации 	участка 	объекта 	

Заказчик в лице 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	должность, фамилия, имя, отчество	
и исполнитель работ (генеральный подрядчик, подрядчик) в лице 	 	 	 	 	

должность, фамилия, имя, отчество	
с другой стороны, руководствуясь Временным положением о приемке законченных строительством объектов на территории Российской Федерации, составили настоящий акт о нижеследующем. 	
1. Исполнителем работ предъявлен заказчику к приемке	 	 	 	 	

наименование объекта и вид строительства	
расположенные по адресу	 	 	 	 	 	 	

2. Строительство производилось в соответствии с разрешением на строительство, выданным	

наименование органа,выдавшего разрешение	
3. В строительстве принимали участие	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	
 	 	наименование субподрядных	
организаций, их реквизиты, виды работ, выполнявшихся каждой из них	
4. Проектно - сметная документация на строительство
разработана генеральным проектировщиком	 	 	 	 	

наименование организации и ее реквизиты	
выполнившим	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	наименование частей или разделов документации	
и субподрядными организациями	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	
 	 	наименование организаций, их	
реквизиты и выполненные части и разделы документации.	
Перечень организаций может указываться в приложении	
5. Исходные данные для проектирования выданы 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	
 	 	 	наименование научно - исследовательских, изыскательских и других организаций,их реквизиты.	
Перечень организаций может указываться в приложении	
6. Проектно - сметная документация утверждена	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	
 	 	 	наименование органа,	
утвердившего (переутвердившего) проектно - сметную	
документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)	
"__" _______ 19__ г. N ________

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:		
Начало работ	 	 		
 	 	 		
 	месяц, год		
Окончание работ	 	 		
 	 	 		
 	месяц, год		

2-я страница формы N КС-11 

8. Вариант А (для всех объектов, кроме жилых домов)

Предъявленный исполнителем работ к приемке	 	
 	 	
 	наименование объекта	

имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объему, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п.

Показатель (мощность, производительность и т.п.) 	Единица измерения 	По проекту 	Фактически 	
 	 	общая с учетом ранее принятых 	в том числе пускового комплекса или очереди 	общая с учетом ранее принятых 	в том числе пускового комплекса или очереди 	
1 	2 	3 	4 	5 	6 	

 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	
Вариант Б. (для жилых домов)
Предъявленный к приемке жилой дом имеет следующие показатели:

Показатель 	Единица измерения 	По проекту 	Фактически 	
1 	2 	3 	4 	
Общая (площадь застройки)	м2	 	 	
Количество этажей	этаж	 	 	
Общий строительный объем 	м3	 	 	
в том числе подземной части 	м3	 	 	
Площадь встроенных, встроенно - пристроенных и пристроенных помещений	м2	 	 	
Всего квартир 	шт	 	 	
общая площадь	м2	 	 	
жилая площадь	м2	 	 	
 в том числе:	 	 	 	
однокомнатных	шт	 	 	
общая площадь	м2	 	 	
жилая площадь	м2	 	 	
двухкомнатных 	шт	 	 	
общая площадь	м2	 	 	
жилая площадь	м2	 	 	
трехкомнатных 	шт	 	 	
общая площадь	м2	 	 	
жилая площадь	м2	 	 	
четырех- и более комнатных	шт	 	 	
общая площадь	м2	 	 	
жилая площадь	м2	 	 	

3-я страница формы N КС-11 

9. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ____). 10. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты пользователями - городскими эксплуатационными организациями (перечень справок пользователей городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ___).
11. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданию, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены (при переносе сроков выполнения работ):

Работы 	Единица измерения 	Объем работ 	Срок выполнения 	
1 	2 	3 	4 	

 	 	 	 	

 	 	 	 	

12. Стоимость объекта по утвержденной проектно - сметной документации	
12. Стоимость объекта по утвержденной проектно - сметной документации 	 	
 	 	
в том числе:	руб. коп.	
стоимость строительно - монтажных работ	 	
 	 	
 	руб. коп.	
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря	 	
 	 	
 	руб. коп.	
13. Стоимость принимаемых основных фондов	 	
 	 	
в том числе:	руб. коп.	
стоимость строительно - монтажных работ	 	
 	 	
 	руб. коп.	
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря	 	
 	 	
 	руб. коп.	
14. Неотъемлемой составной частью настоящего акта является документация, перечень которой приведен в приложении ____ (в соответствии с приложением 3 Временного положения).

15.Дополнительные условия	 	
 	 	
пункт заполняется при совмещении приемки с вводом объекта в действие, приемке "под ключ", при частичном вводе в действие или приемке, в случае совмещения функций заказчика и исполнителя работ

Объект сдал	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	
 	должность	 	подпись	 	расшифровка подписи 	

Объект принял	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	
 	должность	 	подпись	 	расшифровка подписи 	
Исполнитель работ Заказчик
(генеральный подрядчик,
подрядчик)

Примечание. В случаях, когда функции заказчика и исполнителя работ - подрядчика выполняются одним лицом, состав подписей определяется инвестором.

ТИПОВАЯ МЕЖОТРАСЛЕВАЯ ФОРМА N КС-14
УТВЕРЖДЕНА 
Постановлением 
Госкомстата России 
от 30.10.97 N 71а 

	УТВЕРЖДАЮ 	
 	 	 	 	 	 	
 	должность 	 	подпись 	 	расшифровка
подписи	
 
"__" ______ 19__ г. 

АКТ N ______________
ПРИЕМКИ ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИЕЙ

	 	 	 	Коды 	
Организация	 	Форма по ОКУД	 	0336004	
 	 	по ОКПО	 	 	

	Дата составления 	Код вида операции 	Код 	
	 	 	строительной организации 	участка 	объекта 	

Местонахождение объекта	 	
	 	
приемочная комиссия, назначенная 	 	
 	 	
 	наименование органа, назначившего комиссию	
решением (приказом, постановлением и др.) от "__" ________ 19__ г. установила:	

1. Исполнителем работ предъявлен комиссии к приемке	 	 	
 	 	 	
 	 	наименование объекта и вид строительства	
расположенный по адресу	 	 	 	

2. Строительство производилось в соответствии с разрешением на строительство, выданным	

наименование органа,выдавшего разрешение 	 	
3. В строительстве принимали участие	 	 	
 	 	 	
 	наименование субподрядных организаций,	
виды работ, выполнявшихся каждой из них 	
4. Проектно - сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком

 	
наименование организации и ее реквизиты 	
выполнившим 	 	 	 	
 	 	 	 	
 	наименование частей или разделов документации	
 и субподрядными организациями	 	 	
 	 	 	
 	наименование организации, их реквизиты, выполненные части и разделы документации	
 	
перечень организаций может указываться в приложении	
5. Исходные данные для проектирования выданы	 	 	
 	 	 	
 	 	 наименование	
 	
научно - исследовательских, изыскательских и других организаций, их реквизиты.	
 	
перечень организаций может указываться в приложении	
6. Проектно - сметная документация утверждена	 	 	

 	 	наименование органа, утвердившего (переутвердившего)	
 	
проектно - сметную документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)	
 	 	 	 	
"__" _______ 19__ г. N	 	 	 	
7. Строительно - монтажные работы осуществлены в сроки:	 	 	
Начало работ	 	 	 	
 	 	 	 	
 	месяц, год	 	 	
Окончание работ	 	 	 	
 	 	 	 	
 	месяц, год	 	 	

2-я страница формы N КС-14 

8. Вариант А (для всех объектов, кроме жилых домов)

Предъявленный исполнителем работ к приемке	 	
 	 	
 	наименование объекта 	
имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объему, пропускной способности, провозной способности, количество рабочих мест и т.п.

Показатель (мощность, производительность и т.п.) 	Единица измерения 	По проекту 	Фактически 	
 	 	общая с учетом ранее принятых 	в том числе пускового комплекса или очереди 	общая с учетом ранее принятых 	в том числе пускового комплекса или очереди 	
1 	2 	3 	4 	5 	6 	

 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	
Вариант Б. (для жилых домов) Предъявленный к приемке жилой дом имеет следующие показатели:

Показатель 	Единица измерения 	По проекту 	Фактически 	
1 	2 	3 	4 	
Общая (площадь застройки) 	м2 	 	 	
 	 	 	 	
Количество этажей 	этаж 	 	 	
 	 	 	 	
Общий строительный объем 	м3 	 	 	
в том числе подземной части 	м3 	 	 	
 	 	 	 	
Площадь встроенных, встроенно - пристроенных и пристроенных помещений 	м2 	 	 	
 	 	 	 	
Всего квартир 	шт. 	 	 	
общая площадь 	м2 	 	 	
жилая площадь 	м2 	 	 	
 	 	 	 	
в том числе: 	 	 	 	
 	 	 	 	
однокомнатных 	шт. 	 	 	
общая площадь 	м2 	 	 	
жилая площадь 	м2 	 	 	
 	 	 	 	
двухкомнатных 	шт. 	 	 	
общая площадь 	м2 	 	 	
жилая площадь 	м2 	 	 	
 	 	 	 	
трехкомнатных 	шт. 	 	 	
общая площадь 	м2 	 	 	
жилая площадь 	м2 	 	 	
 	 	 	 	
четырех- и более комнатных 	шт. 	 	 	
общая площадь 	м2 	 	 	
жилая площадь 	м2 	 	 	

3-я страница формы N КС-14 

9. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении).
10. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты пользователями - городскими эксплуатационными организациями (перечень справок пользователей городских эксплуатационных организаций приведен в приложении).
11. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданию, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены (при переносе сроков выполнения работ):

Работы 	Единица измерения 	Объем работ 	Срок выполнения 	
1 	2 	3 	4 	

 	 	 	 	

 	 	 	 	

12. Стоимость объекта по утвержденной проектно - сметной документации	 	
 	 	
 	руб. коп.	
в том числе:	 	
стоимость строительно - монтажных работ	 	
 	 	
 	руб. коп	
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря	 	
 	 	
 	руб. коп	
13. Стоимость принимаемых основных фондов	 	
 	 	
в том числе:	руб. коп	
стоимость строительно - монтажных работ	 	
 	 	
 	руб. коп	
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря	 	
 	 	
 	руб. коп	
14. Неотъемлемой составной частью настоящего акта является документация, перечень которой приведен в приложении ____ (в соответствии с приложением 3 СНиП РФ).
15. Дополнительные условия _______________________________________ пункт заполняется при совмещении приемки с вводом объекта в действие, приемке "под ключ", при частичном вводе в действие или приемке, в случае совмещения функций заказчика и исполнителя работ

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

Предъявленный к приемке __________________________________________
наименование объекта выполнен в соответствии с проектом, отвечает санитарно - эпидемиологическим, экологическим, пожарным, строительным нормам и правилам и государственным стандартам и вводится в действие

Председатель комиссии	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	
 	должность 	 	подпись 	 	расшифровка подписи 	

Члены комиссии - представителей заказчика застройщика:	 	 	 	 	 	
генерального подрядчика	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	
 	должность	 	подпись	 	расшифровка подписи	
органов государственного санитарно - эпидемиологического надзора 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	
 	должность	 	подпись	 	расшифровка подписи	
органов экологического надзора	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	
 	должность	 	подпись	 	расшифровка подписи	
органов государственного пожарного надзора	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	
 	должность	 	подпись	 	расшифровка подписи	
органов государственного архитектурно - строительного надзора	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	
 	должность	 	подпись	 	расшифровка подписи	
генерального проектировщика	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	
 	должность	 	подпись	 	расшифровка подписи	
других заинтересованных органов и организаций	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	
 	должность	 	подпись	 	расшифровка подписи	

УНИФИЦИРОВАННАЯ ФОРМА N КС-17
УТВЕРЖДЕНА 
Постановлением Госкомстата России 
от 11 ноября 1999 г. N 100 

	 	 	 	 	 	 	Коды	
 	 	 	 	Форма по ОКУД	 	0322010	
 	 	 	 	Дата составления	 	 	 	 	
Инвестор	 	 	 	 	по ОКПО	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	(организация, адрес, телефон, факс)	 	 	 	 	 	
Заказчик (Генподрядчик)	 	 	 	по ОКПО	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	(организация, адрес, телефон, факс)	 	 	 	 	 	
Подрядчик (Субподрядчик)	 	 	 	по ОКПО	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	(организация, адрес, телефон, факс)	 	 	 	 	 	
Стройка	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	(наименование, адрес)	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	Вид деятельности по ОКДП	 	 	 	 	
Договор подряда (контракт)	 	 	 	номер	 	 	
 	 	 	 	 	дата	 	 	 	 	
Основание для разрешения
на строительство	 	 	 	номер	 	 	
 	 	 	 	 	дата	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	номер	 	 	
Основание для приостановления
строительства	 	 	 	дата	 	 	 	 	
 	 	 	 	Вид операции	 	 	

	Номер документа	Дата составления	 	Отчетный период	
 				с	по	

АКТ
О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Номер по порядку 	Наименование и назначение объектов, работ и затрат, приостановленных строительством 	Код 	Дата начала строительства 	Полная сметная (договорная) стоимость, руб. 	Сметная (договорная) стоимость выполненных работ на дату приостановления, руб. 	Фактические затраты на дату приостановления строительства по балансу застройщика, руб. 	Средства, необходимые для расчетов с подрядной организацией, включая незавершенное производство, руб. 	В том числе: убытки неустойки подрядной организации, связанные с расторжением договоров на поставку материалов, конструкций, руб. 	Стоимость работ и затрат, необходимых на консервацию, руб. 	
 	 	 	 	всего 	в том числе строительно - монтажные работы 	всего 	в том числе строительно - монтажные работы 	 	 	 	 	
1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	10 	1 	12 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	и т.д.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	Итого	 	 	 	 	 	 	 	 	

Оборотная сторона формы N КС-17

Номер по порядку 	Наименование и назначение объектов, работ и затрат, приостановленных строительством 	Код 	Дата начала строительства 	Полная сметная (договорная) стоимость, руб. 	Сметная (договорная) стоимость выполненных работ на дату приостановления, руб. 	Фактические затраты на дату приостановления строительства по балансу застройщика, руб. 	Средства, необходимые для расчетов с подрядной организацией, включая незавершенное производство, руб. 	В том числе: убытки неустойки подрядной организации, связанные с расторжением договоров на поставку материалов, конструкций, руб. 	Стоимость работ и затрат, необходимых на консервацию, руб. 	
 	 	 	 	всего 	в том числе строительно - монтажные работы 	всего 	в том числе строительно - монтажные работы 	 	 	 	 	
1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	10 	1 	12 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	и т.д. 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	Итого	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	Всего
по акту	 	 	 	 	 	 	 	 	

Руководитель подрядной
организации	 	 	 	 	

 	 	должность	 	подпись	 	расшифровка подписи	

Главный бухгалтер	 	 	 	
 	 	 	 	
 	подпись	 	расшифровка подписи	
М.П.	 	 	 	

Руководитель подрядной
организации	 	 	 	 	

 	 	должность	 	подпись	 	расшифровка подписи	

Главный бухгалтер	 	 	 	
 	 	 	 	
 	подпись	 	расшифровка подписи	
М.П.	 	 	 	

УНИФИЦИРОВАННАЯ ФОРМА N КС-18
УТВЕРЖДЕНА 
Постановлением Госкомстата России 
от 11 ноября 1999 г. N 100 

	 	 	 	 	 	 	Коды	
 	 	 	 	Форма по ОКУД	 	0322011	
 	 	 	 	Дата составления	 	 	 	 	
Инвестор	 	 	 	 	по ОКПО	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	(организация, адрес, телефон, факс)	 	 	 	 	 	
Заказчик	 	 	 	 	по ОКПО	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	(организация, адрес, телефон, факс)	 	 	 	 	 	
Проектная организация	 	 	 	по ОКПО	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	(организация, адрес, телефон, факс)	 	 	 	 	 	
Стройка	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	(наименование, адрес)	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	Вид деятельности по ОКДП	 	 	
Договор подряда (контракт)	 	 	 	номер	 	 	
 	 	 	 	 	дата	 	 	 	 	
 	 	 	Задание на 	 	номер	 	 	
 	 	 	проектирование	 	дата	 	 	 	 	
Основание для приостановления
проектно - изыскательских работ	 	 	номер	 	 	
 	 	 	 	дата	 	 	 	 	
 	(наименование документа)	Вид операции	 	 	

	Номер документа	Дата составления	 	Отчетный период	
 				с	по	

АКТ
О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ПРОЕКТНО - ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ ПО НЕОСУЩЕСТВЛЕННОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ

Номер по порядку 	Наименование объекта, стадий работ 	Обоснование прекращения проектно - изыскательских работ 	Полная сметная (договорная) стоимость проектно - изыскательских работ, руб. 	Сметная (договорная) стоимость выполненных проектно - изыскательских работ до их приостановления, руб. 	Фактические затраты на дату приостановления работ по данным заказчика проекта, руб. 	Средства, необходимые для расчетов с проектной организацией, включая незавершенные проектно - изыскательские работы, руб. 	В том числе: убытки и неустойки проектной организации, связанные с расторжением договоров на поставку материалов, аренду и оборудование, руб. 	Стоимость работ и затрат, необходимых на консервацию проектно - изыскательских работ , руб. 	
1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	и т.д. 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Итого 	 	 	 	 	 	 	

Оборотная сторона формы N КС-18 

Номер по порядку 	Наименование объекта, стадий работ 	Обоснование прекращения проектно - изыскательских работ 	Полная сметная (договорная) стоимость проектно - изыскательских работ, руб. 	Сметная (договорная) стоимость выполненных проектно - изыскательских работ до их приостановления, руб. 	Фактические затраты на дату приостановления работ по данным заказчика проекта, руб. 	Средства, необходимые для расчетов с проектной организацией, включая незавершенные проектно - изыскательские работы, руб. 	В том числе: убытки и неустойки проектной организации, связанные с расторжением договоров на поставку материалов, аренду и оборудование, руб. 	Стоимость работ и затрат, необходимых на консервацию проектно - изыскательских работ , руб. 	
1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	и т.д. 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Итого 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Всего
по акту 	 	 	 	 	 	 	

Руководитель подрядной
организации	 	 	 	 	

 	 	должность	 	подпись	 	расшифровка подписи	

Главный бухгалтер	 	 	 	
 	 	 	 	
 	подпись	 	расшифровка подписи	
М.П.	 	 	 	

Руководитель подрядной
организации	 	 	 	 	

 	 	должность	 	подпись	 	расшифровка подписи	

Главный бухгалтер	 	 	 	
 	 	 	 	
 	подпись	 	расшифровка подписи	
М.П.